2018 대구국제섬유박람회

전시 기본부스 및 부대시설물 장치공사 시방서

2018.  1.

제 1 장 총   칙

1절. 공사개요

1. 공사건명 :『2018 대구국제섬유박람회(PID) 전시 기본부스 및 부대시설물』

장치공사

2. 장    소 : 엑스코 Hall 1,2,3C

3. 전시기간 : 2018. 3. 7(수) ~ 9(금) / 3일간

4. 장치공사일정

가) 내부공사기간 : 2018. 3. 4(일) ~ 6(화) (3일간)

나) 외부장치물 착수일 : 계약일로 부터

다) 표준식 부스공사(설치)완료일 : 2018. 3. 6(화) 12:00 까지

라) 부대시설 및 추가공사(설치)완료일 : 2018. 3. 6(화) 16:00 까지

- 단 발급데스크 부스공사(설치) 완료일 : 2018. 3. 5(월) 18:00 까지

라) 철거완료일 : 2018. 3. 10(토) 18:00 까지

2절. 장치공사내역

※ 별첨 자료 참조

※ 조립부스 및 부대시설 시공에 있어 공사수량의 증․차감에 대해 상호 협의에 의해 실수량(실투입) 정산을 합니다.

※ 대구국제섬유박람회(PID) 부대시설물 디자인에 대해서는 사무국의 요청에 따라 변경을 수용한다.

3절. 일반사항

1. 설계의 해석

본 공사는 도면과 시방서에 의하여 설계자의 지시에 따라 시공하되 불분명한 개소가 있을 시는 설계자의 해석에 따른다.

2. 시    공

본 공사는 현장조립에 앞서 공장에서 완전 제작한 후 운반하여 현장 조립하여야 한다.

3. 재료 및 색조

설계자가 지시하는 대로 재료, 색조대로 시공하여야 하며, 완성 후 현장 확인을 득한 후 담당자에 납품, 시공 확인을 받아야 한다.

4. 설계변경

가. 현장공사에 있어 필요에 따라 재료의 치수, 위치, 공법 등 경미한 변경으로 인한 공사금액 및 공사기간은 증감하지 않는다.

나. 단, 수량이 증가하거나 감소하는 경우는 추가로 공사금액을 정산한다.

다. 연합회의 요구에 의하여 신규품목이 발생할 경우, 해당 과업내용의 변경(설계변경)에 대하여 연합회는 계약상대자와의 협의 하에 변경계약을 체결할 수 있다.

5. 일반재료

본 공사에 사용되는 모든 재료는 도면에 표기된 재료로서 시공하되 K.S. 규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6. 견본품

설계도면에 명시된 모든 칼라, 문안 원고 등은 사전 담당자의 승인을 받은 후에 사용한다.

7. 수    속

가. 공사에 필요한 수속은 시공자 책임 하에 완료토록 한다.

나. 시공 시 필요한 수속절차 및 소요비용은 시공자 부담으로 한다.

8. 공사장 관리

가. 노무자, 기타 인원의 출입감시, 풍기 및 위생단속을 철저히 한다.

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 기타 안전사고 유의하며 사고 시에는 시공자가 전적으로 책임을 진다.

다. 기존 시설물의 파손 등은 시공자가 원상 복구하여야 한다.

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관련, 현장내의 청소를 철저히 하고 전시장 관리자의 지시를 준수 시행한다.

9. 전시 장치물의 사후처리

모든 공사에 투입되는 전시장치 자재는 전시회 기간이 종료된 후 지정된 기간 내 신속히 철거한다.

제 2 장 일반 공사

1절. 조립식 장치물 공사

1. 조립식 장치물의 자재는 시공자측이 보유한 장치물(합판, 상호간판, 알루미늄제작)을 임대하는 조건으로 하되, 장치물은 흠집이나 찌그러진 부분이 없는 신품으로 보이는 자재를 사용, 시공하여야 한다.

2. 조립식 장치물의 자재운반 및 설치, 철거는 시공자 책임 하에 완료토록 해야 한다.

3. 조립식 장치물의 조립공사는 도면에 의하여 조립하되 견고하게 조립되어야 하며 모든 조립식 장치물의 재료는 규격품을 사용하여야 한다.

4. 장치공사 내역, 설치 장소 및 디자인 변경은 전시회의 특성에 따라 일부 조정될 수 있으며, 시공자측은 연합회의 요구에 최선을 다하여야 한다.

5. 모든 조립식 장치물은 흠집, 본드자국 등 훼손이 없는 제품을 사용하도록 한다.

※ 특기사항

모든 조립식 상호명 보드 색상 및 레터링 높이는 설계도면에 의거하여 동일하게 제작할 것

2절. 목공사 및 그래픽 공사

1. 재료

목재와 합판은 건조한 것으로 사용하여야 하며 구부러짐, 균열 및 기타 결점이 없고, 특히 합판은 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하며, 담당자가 인정할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

2. 쇠못은 특별한 것을 제외하고는 모두 2.5배 이상의 길이의 것을 사용하여야 한다.

3. 철 재료는 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하고 그 제조회사, 제품명 등에 대해 담당자의 승인을 받는다.

4. 가연성 칠 및 사용 중인 칠은 전용 창고, 또는 방화에 특히 유의하여 보관하여야 한다.

5. 세밀하게 도면대로 칠 또는 그래픽을 하여야 하며, 색상, 광택 등을 담당자에게 확인, 승인을 받는다.

6. 칠은 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔자국 등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 도장한다.

7. 칠은 일차 바데 도포한 후 샌드페이퍼로 연마하고 도장함을 원칙으로 한다.

3절. 파이텍스 공사

1. 부스 내 파이텍스 공사는 지정한 색상으로 하되 담당자의 승인을 받아야 한다.

2. 파이텍스는 방염 신품을 사용하여야 하고 조각품을 사용하여서는 안 된다.

3. 파이텍스 색상은 동일해야 하며, 얼룩진 면이 있어서는 안 된다.

4. 공사 후 전시기간 동안 파이텍스의 이음부분이 일어나는 것을 보는 즉시 보수 완료하여야 한다.

5. 파이텍스는 접착 면이 고르게 부착되어야 하며, 울거나 찌그러들면 안된다.

4절. 전기배선공사

1. 전기선은 K.S. 규격품의 제품을 사용하여야 한다.

2. 시공은 전기 기술자격 소지자로 하여금 배선계획을 세워 시공토록 하며, 자격증 사본2부를 공사 시작 3일전까지 담당자에게 제출하여야 한다.

3. 특히 안전사고가 없도록 접속부분은 튼튼하게 비틀어 매고 충분히 절연 테이프를 감아 완전한 시공을 하여 전기안전사고에 유의토록 한다.

5절. 압축공기 및 급배수 설비

1. 압축공기 및 급배수설비는 EXCO의 설치 및 관련 규정을 준수하여 설치하여야 한다.

2. 사용에 이상 없도록 최종 점검을 하여야 하며, 연결 배관 마감 작업, 통로 측 배관 보양(주의 표시 설치) 등 안전사고를 미연에 방지하도록 최선의 조치를 다하여야 한다.

※ 특기사항

전기 담당자는 전시장 개장시간(준비, 행사, 철거시간)동안 전시장내에 상주하여야 한다.

2018.  1.

(사)대구경북섬유산업연합회